실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2022-10

담당부서

작성자

인프라본부 비행장시설팀

담당자 배형열 (741-5854)

hyungyoul_bae@airport.kr

사 업 명

활주로 재포장공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 노후 포장시설의 기능수명 연장을 통한 안전한 항공기

이착륙 환경 제공

ㅇ 추진기간 : 2021. 5월 ~ 2023. 12월

ㅇ 총사업비 : 약 600억 원

ㅇ 주요내용

- 연성포장 아스콘 절삭 덧씌우기(약 1,200천㎡)

- 강성포장 콘크리트 단면보수 및 줄눈보수(약 250㎞)

ㅇ 추진경과

- 2020. 06 : 활주로 전면 재포장 실시설계 착수

- 2020. 12 : 제3활주로 전면 재포장 실시설계 완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 비행장시설팀 차장 3급 채준

- 최종 결재자 : 부사장 임남수

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
부사장	임남수	`20.06∼`21.06	공사업무 총괄
본부장	김필연	`20.06∼`21.06	운항본부 업무총괄
본부장	이경용	`21.07∼`21.11	인프라본부 업무총괄
본부장	전형욱	`21.12∼현재	인프라본부 업무총괄
처장	배영민	`20.06∼`21.06	운항시설처 업무총괄
처장	이경화	`21.07∼현재	공항시설처 업무총괄

구분	성명	수행기간	담당업무
팀장	권순원	`20.06∼`21.12	비행장시설팀 업무총괄
팀장	이선구	`22.01∼현재	비행장시설팀 업무총괄
차장	채준	`20.06∼`22.01	설계·건설사업관리·공사발주 업무
차장	권대숙	`22.01∼현재	설계·건설사업관리·공사발주 업무
과장	고한영	`20.06∼`21.05	설계·건설사업관리·공사발주 업무
대리	배형열	`20.06∼현재	설계·건설사업관리·공사발주 업무

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 사업인허가, 활주로 운영계획 등

- 국토부 서울지방항공청(공항시설과, 관제과)

ㅇ 설계자

- 한국종합기술(주)

ㅇ 건설사업관리

- ㈜유신, 동부엔지니어링(주), ㈜이산

ㅇ 시공사

- ㈜남경건설 (3활주로 재포장공사)

* 1활주로 및 2활주로 시공사 선정예정

추진실적

ㅇ 2021. 6∼12월 : 제3활주로 재포장공사 완료

ㅇ 2022. 4월 : 제1활주로 재포장공사 착수(예정)