실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2022-12

담당부서

작성자

운영본부 터미널리뉴얼팀

담당자 주성은 (741-5874)

se.ju@airport.kr

사 업 명

제1여객터미널 시설재배치 및 개선사업

사업개요 및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 2018년 1월 T2 운영개시에 따라, T1·T2 항공사 분산 배치 등 운영환경 변화에 대응하고, T1 여객처리시설의 운영효율성 및 용량증대를 위함

ㅇ 추진기간 :、17. 12. ∼、22. 7. (4년 7개월)

ㅇ 총사업비 : 670억 원

ㅇ 주요내용

- 출국심사지역 시설재배치, 확충 및 환경개선

- 세관검사지역 시설재배치 및 환경개선

- 수하물수취대, 환영홀 및 출발홀 환경개선

- 여객용 화장실(23개소) 환경개선

- 지급자재(사이니지, 가구, 화강석, FCU 등) 구매 및 설치

ㅇ 추진경과

- 、17. 12. ∼、19. 2. : 설계용역 시행

- 、19. 3.            : 공항개발사업 실시계획 승인완료

- 、19. 5.            : 공사 시행범위 조정

- 、19. 10.           : 공사 계약 체결

- 、19. 11.           : 건설사업관리용역 계약 체결

- 、20. 1.            : 지급자재 계약 체결

- 、19. 12. ∼  현재  : 공사 시행

사업수행자

(관련자 및

담당업무)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 과장 4급 곽상규

- 최종 결재자 : 사장 정일영

ㅇ 사업 관련자 및 담당업무

구분	성명	수행기간	담당업무
기관장	정일영	‘17.12. ~ ’20. 5.	인천공항 업무 총괄
	구본환	‘20. 5. ~ ’20.10.
	김경욱	‘20.10. ~ 현재.
본부장	김영규	‘17.12. ~ ’18. 9.	시설 업무 총괄
	양기범	‘18. 9. ~ ’19. 7.
	백정선	‘19. 7. ~ ’21. 9.	여객 업무 총괄
	전형욱	‘21. 9. ~ ’21.11.	운영 업무 총괄
	류진형	‘21. 9. ~ 현재.
처장	이동현	‘17.12. ~ ’18. 2.	건축시설 업무 총괄
	안일형	‘18. 2. ~ ’20.12.
	천정이	‘20.12. ~ 현재
팀장	오영섭	‘17.12. ~ ’18. 2.	터미널리뉴얼 업무 총괄
	김장호	‘18. 2. ~ ’19. 7.
	이동목	‘19. 7. ~ ’20 .1.
	구태균	‘20. 1. ~ 현재
차장	임종길	‘18. 1. ~ ’19. 2.	건축시설 설계 업무
	윤기용	‘17.12. ~ ’19 .4.
대리	남선해	‘18. 2. ~ ’19. 2.
차장	지인열	‘18. 2. ~ ’20. 2.	기계설비 설계 업무
차장	임종길	‘19. 3. ~ 현재	건축시설 시공 업무
사원	주인수	‘19. 3. ~ ’22. 1.
대리	남선해	‘22. 1. ~ 현재
사원	주성은	‘22. 1. ~ 현재
차장	윤석중	‘20. 2. ~ ’22. 1.	기계시설 시공 업무
사원	윤수빈	‘20. 2. ~ ’22. 1.
차장	고준영	‘22. 1. ~ 현재
과장	김준기	‘22. 1. ~ 현재
차장	임종길	‘19. 3. ~ 현재	건설사업관리 용역 업무
대리	남선해	‘19. 3. ~ 현재
차장	임종길	‘19. 3. ~ 현재	지급자재 (사이니지, 가구, 화강석) 구매·설치 업무
대리	문지은	‘19. 6. ~ 21. 1.
대리	남선해	‘19. 3. ~ 현재
사원	주인수	‘19. 3. ~ ’22.1.
사원	주성은	‘20. 6. ~ 현재

사업수행자

(관련자 및

담당업무)

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ사업 인·허가 등 : 국토부 서울지방항공청 공항지원과

ㅇ설   계   사 : 정림건축 컨소시엄

ㅇ시   공   사 : ㈜한라 컨소시엄

ㅇ건설사업관리단 : ㈜삼우씨엠 건축사사무소 컨소시엄

ㅇ지 급 자 재

- 사이니지 : 디자인올림(주)

- 가    구 : 네오퍼스(주)

- 화 강 석 : 라성석재주식회사

추진실적

ㅇ 17.12월 : 설계용역 계약 체결 및 착수

ㅇ 18. 7월 : 평면 계획 및 인테리어 컨셉 등 검토

ㅇ 19. 2월 : 설계도서 Rev.0 제출

ㅇ 19.12월 : 공사 착수

ㅇ 20. 3월 : COVID-19에 대응한 공사일정 1차 변경

ㅇ 20. 9월 : COVID-19에 대응한 공사일정 2차 변경

ㅇ 22. 1월 : 현재 기준 공정률 98.3%

- 1층 도착층

· 세관검사구역 : 총 6개소 中 5개소 완료, 1개소 진행

· 수하물수취대 : 총 23개소 中 21개소 완료, 2개소 진행

· 여객용화장실 : 총 11개소 개선 완료

- 3층 출발층

· 출   국   장 : 총 4개소 개선 완료

· 여객용화장실 : 총 12개소 개선 완료