실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2022-18

담당부서

작성자

운영본부 교통시설팀

담당자 정도용(741-5720)

1999cdy@airport.kr

사 업 명

통합교통관리시스템 개선사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 시스템 내용연수 초과에 따른 노후시설 적기교체

- 공항 주요도로 내 교통사고 대응 및 여객서비스 강화

ㅇ 추진기간 : ’22. 5월 ∼ ’23.11월

ㅇ 총사업비 : 94억 원

ㅇ 주요내용

- (CCTV) 67식 증설로 공항 주요도로 대상 감시지역 확대

개선 전	개선 후
설치개소 : 43개소	설치개소 : 110개소(67식 증설)

- (교통안내전광판) T1 교통안내전광판 내용연수(8년) 초과에     따른 시설 노후화 및 부품 단종으로 전광판 교체

- (정보통신망) T2-T1 간 상이한 망 구성 개선 및 단일망으로    구성된 교통관리/신호제어/영상감시망 분리하여 보안성 강화

- (센터시스템) 관리 시설물 증가 및 망 개선에 따른 서버   증설 등 H/W와 외부 연계기능 개발 등 S/W 동시개선

ㅇ 추진경과

- ’20. 9월∼ ’21. 7월 : 설계용역 시행

- ’21.12월 : 사업 과업내용서 사전공개 완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
본부장	백정선	’20.1∼’21.9	본부업무 총괄
본부장	류진형	’21.11∼현재	본부업무 총괄
처장	이상욱	’19.12∼’21.12	처업무 총괄
처장	조우호	’22.1∼현재	처업무 총괄
팀장	이연근	’19.12∼’21.7	팀업무 총괄
팀장	김성수	’21.7∼현재	팀업무 총괄
과장	양성보	’19.12∼’20.1	실무담당
대리	백택준	’20.2∼’21.7	실무담당
차장	최웅식	’20.10∼’21.4	실무담당
과장	김선형	’21.4∼현재	실무담당
대리	유하은	’21.9∼현재	실무담당
과장	정도용	’22.1∼현재	실무담당

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 설계자

- 동림티엔에스컨소시엄((주)동림티엔에스, 대영유비텍(주))

추진실적

ㅇ ’21. 7월 : 교통주차 정보전략 계획수립 및 설계용역 준공

ㅇ ’22. 3월 : 사업 시행범위 검토 및 시행계획 예정