실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2022-03

담당부서

작성자

인프라본부 LS토목팀

담당자 유수영 (741-2256)

swimming@airport.kr

사 업 명

T1-T2 연결도로공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 버스사업자의 지속적인 민원 제기에 따라 T1-T2간 이동 접근성 및 정시성 확보를 위해 최단거리 도로 개설

ㅇ 추진기간 : 2019.11월 ∼ 2022.08월

ㅇ 총사업비 : 528억 원

ㅇ 주요내용

- 도로연장 3.87km(왕복 4차로 신설, 설계속도 80km/h)

- 입체교차로 2개소(지하차도 2개소, 교량 1개소)

ㅇ 추진경과

- 2018.05. : 노선 확정

- 2019.04. : 공사 시행방침 수립

- 2019.11. : 공사계약체결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 대리 4급 손영호

- 최초 입안자 : 부사장 직무대행 김종서

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
본부장	김영웅	’17.08~’18.05	4단계 건설사업 업무총괄
본부장	신주영	’18.05~’20.09	4단계 건설사업 업무총괄
본부장	전형욱	’20.09~’21.07 ’21.11~현재	4단계 건설사업 업무총괄
본부장	이경용	’21.07~’21.11	4단계 건설사업 업무총괄
단장	주견	’21.09~현재	4단계 건설사업 업무총괄
처장	김동철	’18.01~’22.01	4단계 토목시설 업무총괄
처장	김용철	’22.01~현재	4단계 토목시설 업무총괄
팀장	서현우	’17.08~’18.01	4단계 Landside시설 업무총괄
팀장	이선구	’18.01~’22.01	4단계 Landside시설 업무총괄
팀장	권순원	’22.01~현재	4단계 Landside시설 업무총괄
차장	천성한	’18.02~’19.11	공사감독관리
차장	장희범	’18.02~’22.01	공사감독관리
과장	손영호	’18.02~’22.01	공사감독관리
사원	김상훈	’19.01~’22.01	공사감독관리
대리	김한승	’22.01~현재	공사감독관리
사원	유수영	’22.01~현재	공사감독관리

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 서울지방항공청 공항시설과

- 사업 인․허가 등

ㅇ 설계자

- 유신 컨소시엄(유신, 도화, 수성ENG)

ㅇ 감리자

- 유신 컨소시엄(유신, 도화, 수성ENG)

ㅇ 시공자

- 동부건설, 고운시티아이, 신성건설

추진실적

ㅇ 2019.11. : 공사계약체결 및 본공사 착수

ㅇ 2020.03. : 연약지반처리공 착수

ㅇ 2020.05. : 구조물공(지하차도) 착수