실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2022-04

담당부서

작성자

인프라본부 수하물설비팀

담당자 이주혁 (741-6960)

juhyuck.lee@airport.kr

사 업 명

인천국제공항 4단계 제2여객터미널 수하물처리시설 확장사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 항공수요 증가에 대비한 4단계 건설사업 계획*에 따라 제2여객터미널(T2) 위탁 수하물을 안정적으로 처리하기 위하여 T2 수하물처리시설(BHS) 확장사업 적기 추진

* 근거: 국토교통부 고시 제2017-735호(2017.11)

ㅇ 추진기간 : 2021.01.08 ~ 2025.10.31

ㅇ 총사업비                     (단위 : 백만원, VAT 별도)

구분	사업기간	사업비	‘21	‘22	‘23	‘24	‘25
사업비	2021.01.08 ∼ 2025.10.31	330,146	76,304	140,324	88,429	19,525	5,549

ㅇ 주요내용

- 4단계 수하물처리시설(BHS) 구축 및 3단계 개조/연결

(컨베이어설비, 제어시스템, 시운전 등 포함 Turn-Key 기반사업)

ㅇ 추진경과

- 2019.12. : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 입찰공고

- 2021.01. : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 계약체결

- 2021.12. : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 계약변경(1회)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 차장 3급 유병남

- 최종 결재자 : 사장 김경욱

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
기관장	김경욱	‘21.02 ∼ 현재	공사 업무총괄
본부장	전형욱	‘21.11 ∼ 현재	인프라본부 업무 총괄
단장	주견	‘21.09 ∼ 현재	건설사업단 업무 총괄
처장	유길상	‘22.01 ∼ 현재	건축기계처 업무 총괄
팀장	박근효	‘22.01 ∼ 현재	4단계 수하물처리시설 확장사업 업무총괄
팀장	김호석	‘20.01 ∼ ‘21.12
팀장	김영종	‘19.01 ∼ ‘19.12
차장	유병남	‘17.08 ∼ 현재	4단계 수하물처리시설 확장사업 Layout, 기술규격 관리
차장	이명훈	‘20.01 ∼ 현재	4단계 Layout, 공정 및 인터페이스, 기술전수 관리
과장	이영규	‘18.02 ∼ 현재	4단계 시스템 관리(HLC) 및 기술전수 관리, 설계기능서 검토
대리	문재엽	‘19.01 ∼ 현재	4단계 공정 및 인터페이스 관리 및 시뮬레이션, 기계분야 담당
대리	손준규	‘18.02 ∼ 현재	4단계 시스템 관리(LLC) 및 설계기능서 검토, 전기분야 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 서울지방항공청 공항지원과

ㅇ 설계자

- 삼우설계 컨소시엄(삼우, 나우, 정림, 간삼, 안세기술, KBETS, BNP)

ㅇ 감리자

- 희림건축 컨소시엄(희림, 무영, 티씨엠씨, 나라, 성창, 융도)

추진실적

ㅇ‘21.01∼현재 : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업

상세 설계 및 제작 진행

ㅇ‘21.06       : T2 운영지역 설치 착수

ㅇ‘22.01       : T2 신설지역 설치 착수