실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-08

담당부서

작성자

건설사업단 터미널공사2팀

담당자 윤기용(741-5695)

kiyong_yoon@airport.kr

사 업 명

T2 확장 골조 및 마감공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 제2여객터미널 확장을 통한 여객 수용능력 증대

구분	기존(3단계)	확장(4단계)
		증축	개선
면적	터미널 : 387,621㎥	터미널 : 295,498㎥ 탑승교 : 2,201㎥	유보개발 : 52,186㎥ 개선공사 : 52,019㎥
층수	지하2층, 지상5층	지하2층, 지상5층
수용량	2,300만명/년	2,900만명/년 추가(총 5,200만명)

ㅇ 추진기간 : ’20.11월 ∼ ’24.10월

ㅇ 총사업비 : 11,948억 원

ㅇ 주요내용

- 골조공사 : RC(192,781㎥), 철골공사(68,639톤)

- 외장/지붕공사 : 커튼월(58,334㎡), 지붕(118,369㎡)

- 마감공사(바닥․벽․천장공사, 인테리어공사, 시설개선공사)

- 분야별 세부 공사 내용

① 건축 : 골조/마감/지붕 및 외장공사

② 기계 : 마감공사(공조, 기계배관, 열원장비)

③ 전기 : 마감공사(조명, 전선, 전열)

④ 토목 : 포장공사(계류장 포장)

ㅇ 추진경과

- ’17. 8월 : 기본설계 착수

- ’18. 8월 : 실시설계 착수

- ’19.10월 : 땅파기 및 파일공사 착수

- ’20.12월 : 골조 및 마감공사 착수

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
단장	주견	1급	‘21.09	4단계 건설사업 업무총괄
처장	유길상	2급	‘21.07	4단계 건축, 기계공사 업무 총괄
팀장	조원기	2급	‘23.01	T2 확장 건축 업무 총괄
차장	윤기용	3급	‘20.12	T2 확장 외장 및 마감 공사 관리
과장	전상윤	4급	‘20.12	T2 확장 외장 공사 관리
대리	강준호	4급	‘22.01	T2 확장 외장 공사 관리
대리	백지민	4급	‘22.10	T2 확장 마감 공사 관리
대리	서상민	4급	‘20.12	T2 확장 마감 공사 관리
대리	윤재용	4급	‘20.12	T2 확장 마감 공사 관리
사원	최한글	5급	‘20.12	T2 확장 마감 공사 관리

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 서울지방항공청 공항지원과

ㅇ 인천시 항공과, 중구 건축허가과

ㅇ (설 계) 삼우 컨소시엄

* 삼우, 나우, 정림, 간삼, 안세, 케이비이티에스

ㅇ (감 리) 희림컨소시엄

* 희림, 근정, 유신, 단에이앤씨, 나라, 대영, 융도

ㅇ 시공사

- (동편) 한화 컨소시엄

* 한화, 풍창건설, 유승건설, 원광건설, 세일이엔에스

- (서편) HJ중공업 컨소시엄

* HJ중공업, 디엘이엔씨, 동부건설, 동화이엔씨

추진실적

ㅇ ’19.11월 : 공항개발사업 실시계획 승인

ㅇ ’21. 5월 : 공항개발사업 실시계획변경 승인

ㅇ ’22. 7월 : 땅파기 및 파일공사 준공

ㅇ ’22.12월 : RC, 철골 등 주요 골조공사 완료