실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2023-09

담당부서

작성자

건설사업단 전기설비팀

담당자 이승민(741-5263)

seungmin.lee@airport.kr

사 업 명

T2 확장 전기공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 여객 1억명 시대를 대비한 4단계 공항 확장사업 적기 추진

- 미래의 항공수요를 고려한 전략적 인프라 확충에 기여

ㅇ 추진기간 : ’20.12월 ∼ ’25.10월

ㅇ 총사업비 : 1,797억 원

ㅇ 주요내용

- 제2여객터미널 확장지역 전기실 8개소 신설

- 전력케이블 817km, 전선관 558km 시공

- AC-GPS 64대, 연료전지 3대 신설

- 배전반 432면, 분전반 1854면, 전동기제어반 314면 설치

- LED 조명기구 및 경관조명 약 100,000등 시공

ㅇ 추진경과

- ’19.11월 : 제2여객터미널 확장 실시계획 승인

- ’20. 5월 : 조달청 공사원가 사전검토 완료

- ’20.12월 : 제2여객터미널 확장 전기공사 계약체결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
단장	주견	‘21.09∼현재	건설사업단 업무총괄
처장	전영근	‘22.01∼현재	전기통신처 업무총괄
팀장	장기욱	‘22.01∼현재	전기설비팀 업무총괄
차장	김승준	‘22.01∼현재	전기공사 사업관리
대리	이승민	‘21.04∼현재	시공 및 계약관리
사원	주현식	‘19.10∼현재	마감(조명 등) 시공관리
사원	최진호	‘23.02∼현재	인터페이스 및 시공관리

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 사업 인·허가 등 : 서울지방항공청 공항안전과

ㅇ 설계사 : ㈜삼우티이씨

ㅇ 감리사 : 주식회사 나라기술단

ㅇ 시공사

- 동측 : 창원기전컨소시엄

* ㈜창원기전, 대동기전 주식회사, 승아전기㈜

- 서측 : 일진파워컨소시엄

* 주식회사 일진파워, ㈜부현전기

추진실적

ㅇ 제2여객터미널 확장 전기공사 공정률(‘22.12.31 기준)

구분	동측			서측
	계획	실적	대비	계획	실적	대비
공정률(%)	35.03	35.62	101.68	35.95	36.67	102.00