실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-

담당부서

작성자

인프라본부 항행처

담당자 전인수(741-6196)

isjeon@airport.kr

사 업 명

서울접근관제시스템 관제기능 개선

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- ICAO ASBU, 국토부 NARAE, 公社 비젼 2030+ 10대   이행과제 등 대내외 상위 계획에 따른 출도착관리시스템   (DMAN/AMAN) 등 첨단 항공교통관제 기능 도입

- 4단계공항건설에 따른 제4활주로 신규 비행절차 적용

- 現 서울접근관제시스템 운영개시(‘17.3.3) 이후 운항안정성   향상 및 관제업무 부하경감을 위한 시스템 스마트화 필요

ㅇ 추진기간 : ’19.12월 ∼ ’24.6월

ㅇ 총사업비 : 61억 원

ㅇ 주요내용

- 4활주로 운영에 따른 신규비행절차 적용 등 SW 업그레이드 총 161건

- DMAN 운영을 위한 하드웨어 증설(관제단말, 서버 등)

- 감시센서 등 신규 인터페이스 구축 및 기존 인터페이스 확장

- 소프트웨어 설치 및 검증

- 유지보수자 및 관제사 교육훈련(공장교육 및 현장직무교육)

ㅇ 추진경과

- 계약체결 및 소프트웨어 개발 착수 : ‘19.12.27

- 1차 소프트웨어 상세설계 및 업그레이드 완료 : ‘20.11.26

* COVID-19 상황 하 비대면 방식을 활용하여 S/W 개발 및 업그레이드 추진

- COVID-19 팬데믹 공정영향 최소화를 위한 제2+3차 소프트웨어통합 업그레이드 방안 보고 : ’21.3.12

- 4활주로 운영개시 신규비행절차 적용 완료 : ‘21.6

- 후속 소프트웨어 업그레이드 상세설계검토(CDR) 완료 : ‘21.7

- 스페인 현지 제작사 교육(2주) 및 공장인수검사(3주) : ’21.11.15∼12.17

- 계약변경(1차) 체결 : ’22.4.29

* COVID-19로 인한 공정별 일정 및 수행 방식 변경에 따른 기간연장

- 2+3차 현장 OJT교육(관제사 운영자 과정, 4주) : ’22.5.2∼5.27

- 소프트웨어 변경 및 보완 요청(서항청 관제과) : ’23.4.6

- 계약변경(2차) 체결 : ’23.5.31

- 4차 소프트웨어 적용 : ’24.2.29

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
부사장	임남수	‘19.9∼‘21.7	결재권자
부사장	김필연	‘21.7∼‘21.11	업무 총괄
부사장	이희정	‘21.11∼‘23.12	업무 총괄
부사장	전형욱	‘23.12∼현재	업무 총괄
본부장	김종서	‘19.9∼’20.5	본부업무 총괄
본부장	김필연	‘20.6∼’21.7	본부업무 총괄
본부장	이경용	‘21.7∼‘21.11	본부업무 총괄
본부장	전형욱	‘21.11∼‘23.12	본부업무 총괄
본부장	주견	‘23.12∼현재	본부업무 총괄
처장	임강현	‘19.9∼’20.1	처업무 총괄
처장	장용석	‘20.1∼’22.12	처업무 총괄
처장	조용수	‘23.1∼‘24.1	처업무 총괄
처장	윤민호	‘24.1∼현재	처업무 총괄
팀장	윤민호	‘19.9∼’20.1	팀업무 총괄
팀장	한대희	‘20.1∼’22.12	팀업무 총괄
팀장	박장근	‘23.1∼‘24.1	팀업무 총괄
팀장	김관오	‘24.1∼현재	팀업무 총괄
차장	김광희	‘19.9∼’23.1	서울접근관제시스템 고도화 사업담당
과장	김수현	‘19.9∼’23.1
과장	전인수	‘23.2∼현재	서울접근관제시스템 고도화 사업담당
대리	임부연	‘23.2∼현재

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 서울지방항공청 관제과

- 新 서울접근관제시스템 고도화사업 소프트웨어 상세설계검토 및 사용검증

ㅇ 계약자(시스템 제작사)

- Indra Systemas S.A. 社(스페인)