실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2024-00

담당부서

작성자

인프라본부 친환경전력처

담당자 원윤혜(741-6974)

yune@airport.kr

사 업 명

제1교통센터 전기실 개선공사

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경(목적)

- 제1교통센터 전기실 전력시설의 내용연수 경과 및 스마트          기술/안전시설 적용을 통한 시설 고도화 개선 시행으로          시설물 장애 방지 및 전력공급 안정성 증대

ㅇ 추진기간 : ’22. 2월 ∼ ‘24. 4월(2년 2개월)

ㅇ 총사업비 : 231억 원           (단위 : 백만 원, VAT 포함)

사업명	공사	감리용역	제조구매 (지급자재)	합계
금 액	9,427	1,859	11,836	23,122

ㅇ 주요내용

- (공 사) 전기실 수배전반 교체 및 시설개선(4개실)

위치(T1 교통센터)	1,2전기실(B3층)		3,4전기실(B2층)
전기실		비상발전기실

- (물 품) 수배전반*, 비상발전기, 전동기제어반, 전력제어반 등        지급자재 제조구매

* 발전소로부터 전력을 받아 나눠주는 전력시스템

- (감 리) 제1교통센터 전기실 개선공사 감리용역 수행

ㅇ 추진경과

- ’20. 1월～‘21. 7월 : 설계용역 시행

- ‘21.10월 : 공항개발사업 실시계획 승인

- ‘22. 2월 : 감리용역, 개선공사 계약체결

- ’22. 4월～‘22. 6월 : 지급자재(8개 PKG) 계약체결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
본부장	주견	‘23.12∼현재	본부 업무총괄
처장	김한선	‘23.12∼현재	처 업무총괄
팀장	이창준	‘23.2∼현재	팀 업무총괄
차장	박정제	‘22.1∼현재	사업 계약 및 관리업무
차장	이희성	‘23.2∼현재	사업 계약 및 관리업무
대리	원윤혜	‘22.10∼현재	사업 계약 및 관리업무

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 사업 인·허가 등 : 서울지방항공청 공항안전과

ㅇ 설계사 : ㈜진전기엔지니어링

ㅇ 감리사 : ㈜세움이앤씨건축사사무소

ㅇ 시공사 : 신세계건설컨소시엄(신세계건설(주), ㈜영동건설)

추진실적

ㅇ ‘23. 2월 : 제1교통센터 전기실 A 공사완료

ㅇ ‘23. 6월 : 제1교통센터 전기실 B 공사완료

ㅇ ‘23. 9월 : 제1교통센터 전기실 D 공사완료

ㅇ ‘23. 12월 : 제1교통센터 전기실 C 공사완료

ㅇ ‘24. 3월 : 제1교통센터 비상발전기 설치 완료