실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-01

담당부서

작성자

인프라본부 스마트공항처

장유진,김동률

(741-5346,6287)

yujin_j@airport.kr

dongryulkim@airport.kr

사 업 명

T1 장기주차장 자율주행셔틀 시범도입

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 공항 내 자율주행셔틀 시범도입을 통한 국내 기술검증·실증 데이터 확보 및 신규 여객 편의 서비스 제공

ㅇ 추진기간 : ’22.8월 ∼ ’25.10월

ㅇ 총사업비 : 23억 원

ㅇ 주요내용

- (대상지역) T1 장기주차장 주변도로(약 3.8km 중 2km 대상)

- (자율주행) 시스템만으로 가감속, 회피, 회전, 차선변경 등 인지/판단/제어 가능한 Lv.4 수준의 기능 구현

- (운행방식) 9∼15인승 상용차 개조 차량 활용 예정이며,정기운행 및 호출형 기반 각 1대 탄력운영

- (운영시간) 평일 10시∼16시

ㅇ 단계별 세부 운영계획

구분	기간	내용
1단계	’22.8∼’23.8	자율주행 차량 2대 개발 및 시운전 (앱구축, 차량제작, 시스템 개발 등)
2단계	’23.9∼’24.9	1차 시범운영
3단계	’24.10∼’25.10	고도화 및 2차 시범운영

ㅇ 추진경과

- ’19. 9월 : 자율주행차량 도입 종합계획(안) 수립

- ’21.11월 : 시범운행지구 관련 관계기관 협의

- ’22. 8월 : 계약 체결 및 사업 착수

- ‘23. 10월 : 1단계 사업 부분준공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무
본부장	전형욱	1급	‘21.11.25.~’23.12.10	인프라본부 총괄
본부장	주견	1급	‘23.12.11.~‘24.12.31.	인프라본부 총괄
부사장	김범호	1급	‘25.1.1.~현재	직할부서 총괄
처장	김상일	1급	‘21.2.10.~‘22.1.1.	스마트공항처 총괄
처장	김기홍	2급	‘22.1.2.∼’23.12.21	스마트공항처 총괄
처장	전병식	2급	‘23.12.22.~’24.12.31	스마트공항처 총괄
실장	서은정	2급	‘25.1.1.~현재	디지털혁신실 총괄
팀장	박장근	2급	‘19.7.5~‘22.1.1.	스마트공항팀 총괄
팀장	배종오	2급	‘22.1.2.∼’24.1.7.	스마트공항팀 총괄
팀장	조승우	2급	‘24.1.8.~현재	운영DX팀 총괄
차장	강자환	3급	‘23.1.27.~’25.2.9.	사업 실무
담당	한정화	4급	‘20.1.8～‘23.8.20.	사업 실무
담당	박재인	4급	‘21.2.27～‘24.1.31.	사업 실무
담당	장유진	4급	‘24.2.1.~’25.2.9	사업 실무
담당	김동률	4급	‘24.2.1.~’25.	사업 실무
담당	김관태	4급	‘25.2.10.~현재	사업 실무

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 모빌리티자동차국 자율주행정책과

- 자율주행기술 도입 관련 제도 개선·운영

ㅇ 사업자

- 오토노머스에이투지 컨소시엄

* 주식회사 오토노머스에이투지, 인포뱅크(주), 주식회사 에이텍티앤

ㅇ 감리자

- ㈜엔에이치아이

추진실적

ㅇ ’22. 4월   : 본사업 방침 수립

ㅇ ’22.5∼6월 : 입찰공고

ㅇ ’22. 8월   : 계약 체결 및 사업 착수

ㅇ ’23. 10월   : 1단계 사업 부분준공