실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-16

담당부서

작성자

수하물운영처 수하물시설팀

담당자 박명수(741-6582)

myoungsoo_park@airport.kr

사 업 명

4단계 제2여객터미널 수하물처리시설 확장사업

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

- 항공수요 증가에 대비한 4단계 건설사업 계획*에 따라       T2 위탁 수하물을 안정적으로 처리하기 위해 수하물 처리      시설(BHS) 확장사업 적기 추진

* 관련근거: 국토교통부 고시 제2017-735호(2017.11)

ㅇ 추진기간 : ’21.1월 ∼ ’25.10월

ㅇ 총사업비 : 3,298억 원

(단위 : 백만원, VAT 별도)

구분	사업비	‘21	‘22	‘23	‘24	‘25
사업비	329,897	24,723	134,926	136,826	30,204	3,218

ㅇ 주요내용

- 4단계 수하물처리시설(BHS) 구축 및 3단계 개조/연결

(컨베이어설비, 제어시스템, 시운전 등 포함 Turn-Key 기반사업)

ㅇ 추진경과

- ’19.12월 : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 입찰공고

- ’21. 1월 : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 계약체결

- ’21.12월 : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 계약변경(1회)

- ’22. 6월 : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 계약변경(2회)

- ’23. 6월 : 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업 계약변경(3회)

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
기관장	이학재	‘23.06 ∼ 현재	공사 업무총괄
본부장	우성태	‘25.01 ∼ 현재	운항본부 업무 총괄
단장	이동현	‘23.12 ∼ ‘24.12	건설사업단 업무 총괄
처장	박근효	‘25.01 ∼ 현재	수하물운영처 업무 총괄
처장	이동목	‘23.12 ∼ ‘24.12	건축설비처 업무 총괄

구분	성명	수행기간	담당업무
팀장	천도영	‘25.01 ∼ 현재	4단계 수하물처리시설 확장사업 업무총괄
팀장	박근효	‘22.01 ∼ ‘24.12
팀장	김호석	‘20.01 ∼ ‘21.12
팀장	김영종	‘19.01 ∼ ‘19.12
차장	이명훈	‘20.01 ∼ ‘24.12	4단계 시운전, 시험운영 및 인터페이스, 기술전수 관리
과장	이병환	‘22.01 ∼ ‘24.12	4단계 검색장비 공정 및 인터페이스, 시험운영 관리
과장	박명수	‘23.03 ∼ 현재	4단계 2차 준공분 기계/전기 설치 및 시운전 등 담당
과장	이영규	‘18.02 ∼ ‘24.12	4단계 시스템 관리(HLC) 및 기술전수 관리, 설계기능서 검토
과장	문재엽	‘19.01 ∼ ‘24.07	4단계 공정 및 인터페이스 관리 및 시뮬레이션, 기계분야 담당
과장	손준규	‘18.02 ∼ ‘24.07	4단계 시스템 관리(LLC) 및 설계기능서 검토, 전기분야 담당
대리	김범수	‘25.01 ∼ 현재	4단계 2차 준공분 기계/전기 설치 및 기성업무 등 담당
대리	조석호	‘24.02 ∼ ‘24.06	4단계 시스템 관리(LLC) 및 설계기능서 검토, 전기분야 담당
대리	김규태	‘20.12 ∼ ‘24.12	4단계 시스템 관리(HLC) 및 기술전수 관리, 설계기능서 검토

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 서울지방항공청 공항지원과

ㅇ 설계자

- 삼우설계 컨소시엄(삼우, 나우, 정림, 간삼, 안세기술, KBETS, BNP)

ㅇ 감리자

- 희림건축 컨소시엄(희림, 무영, 티씨엠씨, 나라, 성창, 융도)

추진실적

ㅇ‘21.01월 : 4단계 T2 BHS 확장 1차 준공분 설계/제작

ㅇ‘21.06월 : 1차 준공분 T2 운영지역 내 설치 착수

ㅇ‘22.01월 : 1차 준공분 T2 신설지역 내 설치 착수

ㅇ‘22.06월 : 1차 준공분 자체시운전 착수

ㅇ‘23.06월 : 3단계 개조/연결지역 제작 및 설치 완료

ㅇ‘24.04월 : 1차 준공분 현장인수시험 완료 및 예비인수

ㅇ‘24.10월 : 1차 준공분 종합시운전 완료 및 조건부 인수

ㅇ‘25.02월 : 2차 준공분(서편 도착캐로셀 2기) 기계설치 착수