실명제 사업내역서

사업실명제

등록번호

2025-07

담당부서

작성자

(건축처 / 건축계획팀)

(권순혁/032-741-5867/

soon@airport.kr)

사 업 명

제1여객터미널 종합개선사업 설계용역

사업개요

및

추진경과

ㅇ 추진배경

’01년 개항 이후 20년 이상 경과된 인천국제공항 제1여객터미널의 종합개선사업을 통해 시설 노후에 대응하고, 운영효율 제고 및 여객편의 개선 추진

ㅇ 추진기간 : ’19.12. - ‘33.12. (약 14년)

* 2024.5.-2027.9. : 설계용역 추진

ㅇ 총사업비 : 1조 200억원(VAT 제외)  * 설계비 51,933백만원

ㅇ 주요내용

터미널 기본구조 유지 범위 내에서 노후시설 개량*을 통한 안전확보 및 스마트 서비스 제공**을 위한 전반적 리모델링

* 건축 17종, 기계·전기·통신 54종, BHS 33종 등 총 104종

노후시설 교체, 환기·소방 등 성능향상

** 출국시 전면 비대면 서비스로 전환, 출국장 통합(4→2개소),

면세점 현대화 등

ㅇ 추진경과

- 2021.8 : 제1여객터미널 노후시설개선 기본계획 수립

- 2022.2. : 기획재정부 예비타당성조사 시행(조건부 면제)

- 2023.11.-2024.4. : 설계공모 심사 및 당선작 선정

- 2024.5.-2027.9. : 설계용역 추진

- 2027.12.-2033.12. : 순차적 분할 공사

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 사업 관련자

구분	성명	수행기간	담당업무
단장	김동철	‘25.2～현재	사업업무 총괄
처장	박경준	‘25.2～현재	사업업무 총괄
팀장	임종길	‘24.6～현재	사업업무 총괄
차장	김지현	‘25.2～현재	건축업무 담당
대리	권순혁	‘24.6～현재	건축업무 담당
사원	유선주	‘24.6～현재	건축업무 담당
차장	이명훈	‘25.2～현재	기계(승강포함)업무 담당
과장	이종부	‘25.2～현재	기계(승강포함)업무 담당
차장	김승준	‘25.2～현재	전기업무 담당
차장	이경성	‘25.2～현재	통신업무 담당
차장	안재관	‘25.2～현재	통신업무 담당
차장	곽상호	‘25.2～현재	통신업무 담당
차장	김형일	‘25.2～현재	통신업무 담당
과장	이경민	‘25.2～현재	통신업무 담당
차장	박노재	‘25.2～현재	BHS업무 담당
차장	유병남	‘25.2～현재	BHS업무 담당
과장	박명수	‘25.2～현재	BHS업무 담당
대리	김범수	‘25.2～현재	BHS업무 담당
차장	심규상	‘25.2～현재	소방업무 담당
과장	조종춘	‘24.6～현재	소방업무 담당
과장	박효신	‘25.2～현재	소방업무 담당
대리	박민수	‘25.2～현재	소방업무 담당
사원	류일상	‘25.2～현재	소방업무 담당
과장	고나영	‘25.2～현재	조경업무 담당
대리	윤재용	‘25.2～현재	조경업무 담당
과장	신영진	‘25.2～현재	상업업무 담당

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 인허가 : 서울지방항공청 공항지원과

ㅇ 설계사 : 희림건축컨소시엄

* 구성사 : ㈜희림종합건축사사무소, ㈜종합건축사사무소근정, 주식회사 하이멕, 대일이엔씨기술(주), 한방유비스(주), 대영유비텍(주)

추진실적

- ’24.5. 설계용역 계약체결 및 기본설계 착수

- ’25.5. 기본설계 완료

- ’27.9. 실시설계 완료

- ’27.12.-’33.12. 개선공사 착공 및 완료